PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	Construção do Fórum Cível na Cidade da Justiça
Município:  Rio Branco - Acre
Endereço:     Avenida Paulo Lemos de Moura Leite Pedro Roseno

ITEM

DESCRIÇÃO

TOTAL DO ITEM VALOR	%

1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS

4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS

1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMEN

2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3	TERRAPLANAGEM

4	PAVIMENTAÇÃO

815.806,31

1.378.493,00

192.700,30

762.600,32

2,23%

3,76%

0,53%

2,08%

350.796,71	43,00%
40.941,24	2,97%
192.700,30	100,00%

39.011,35	2,83%

39.011,35

2,83%

39.011,35	2,83%

39.011,35	2,83%

41.492,64	3,01%

5	SINALIZAÇÃO

6	ESTRUTURAS

28.987,19

9.916.973,01

0,08%

27,06%

495.848,65	5,00%

991.697,30	10,00%

991.697,30

10,00%

991.697,30	10,00%

991.697,30	10,00%

991.697,30	10,00%

7	PAREDES E PAINÉIS

8	ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS

1.276.317,78

6.425.894,11

3,48%

17,53%

63.815,89

5,00%

9	REVESTIMENTOS

1.010.810,41

2,76%

10	PISO

1.522.830,12

4,16%

11	COBERTURA

794.151,90

2,17%

12	PINTURA

564.248,53

1,54%

13	IMPERMEABILIZAÇÃO

586.622,26

1,60%

14	DIVERSOS

305.370,30

0,83%

15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

186.018,99

0,51%

16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

115.696,95

0,32%

17	DRENAGEM

79.137,75

0,22%

18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

712.529,99

1,94%

19	SPDA

55.869,03

0,15%

20	CABEAMENTO ESTRUTURADO

761.257,96

2,08%

21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS

4.381.934,40

11,96%

22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

23	SUBESTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO

24	NO BREAK

1.371.529,05

1.001.629,10

566.499,93

3,74%

2,73%

1,55%

25	CFTV

26	ELEVADORES
27	ESTRUTURA METÁLICA
28	PROJETO EXECUTIVO

699.436,81

751.613,25
130.407,28
254.827,26

1,91%

2,05%
0,36%
0,70%

50.965,45	20,00%

127.413,63	50,00%

76.448,18	30,00%

TOTAL NO PERÍODO			1.131.252,36	3,09%	1.158.122,28	3,16%	1.107.156,83	3,02%	1.030.708,65	2,81%	1.030.708,65	2,81%	1.097.005,83	2,99%	
TOTAL ACUMULADO	36.650.193,28	100,00%	1.131.252,36	3,09%	2.289.374,64	6,25%	3.396.531,47	9,27%	4.427.240,13	12,08%	5.457.948,78	14,89%	6.554.954,61	17,89%	
Rio Branco - Acre, 5 de julho de 2024
Revisão do Orçamento - REV01

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	Construção do Fórum Cível na Cidade da Justiça
Município:  Rio Branco - Acre
Endereço:     Avenida Paulo Lemos de Moura Leite Pedro Roseno

ITEM	
DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM

VALOR	%	

7º MÊS	

8º MÊS		
							
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMEN	815.806,31	2,23%				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.378.493,00	3,76%	41.492,64	3,01%	61.067,24	
4,43%	
3	TERRAPLANAGEM	192.700,30	0,53%				
4	PAVIMENTAÇÃO	762.600,32	2,08%				
5	SINALIZAÇÃO	28.987,19	0,08%				
6	ESTRUTURAS	9.916.973,01	27,06%	991.697,30	10,00%	1.487.545,95	
15,00%	
7	PAREDES E PAINÉIS	1.276.317,78	3,48%	63.815,89	5,00%	63.815,89	
5,00%	
8	ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS	6.425.894,11	17,53%				
9	REVESTIMENTOS	1.010.810,41	2,76%				
10	PISO	1.522.830,12	4,16%				
11	COBERTURA	794.151,90	2,17%				
12	PINTURA	564.248,53	1,54%				
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	586.622,26	1,60%				
14	DIVERSOS	305.370,30	0,83%				
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	186.018,99	0,51%				
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	115.696,95	0,32%				
17	DRENAGEM	79.137,75	0,22%				
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	712.529,99	1,94%				
19	SPDA	55.869,03	0,15%				
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	761.257,96	2,08%				
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	4.381.934,40	11,96%				
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.371.529,05	3,74%				
23	SUBESTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.001.629,10	2,73%				
24	NO BREAK	566.499,93	1,55%				
25	CFTV	699.436,81	1,91%				
26	ELEVADORES	751.613,25	2,05%				
27	ESTRUTURA METÁLICA	130.407,28	0,36%				
28	PROJETO EXECUTIVO	254.827,26	0,70%				
TOTAL NO PERÍODO			1.097.005,83	2,99%	1.612.429,08	4,40%	
TOTAL ACUMULADO	36.650.193,28   100,00%	7.651.960,44	20,88%	9.264.389,52	25,28%	
Rio Branco - Acre, 5 de julho de 2024
Revisão do Orçamento - REV01

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	Construção do Fórum Cível na Cidade da Justiça
Município:  Rio Branco - Acre

ITEM

DESCRIÇÃO

TOTAL DO ITEM

VALOR

ANEXO
P

%

9º MÊS

10º MÊS

11º MÊS

12º MÊS

13º MÊS

1

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMEN

815.806,31

2,23%

2

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.378.493,00

3,76%

41.492,64

3,01%

44.111,78

3,20%

26.329,22

1,91%

26.329,22

1,91%

31.291,79

2,27%

3

TERRAPLANAGEM

192.700,30

0,53%

4

PAVIMENTAÇÃO

762.600,32

2,08%

5

SINALIZAÇÃO

28.987,19

0,08%

6

ESTRUTURAS

9.916.973,01

27,06%

991.697,30

10,00%

991.697,30

10,00%

7

PAREDES E PAINÉIS

1.276.317,78

3,48%

63.815,89

5,00%

127.631,78

10,00%

127.631,78

10,00%

127.631,78

10,00%

127.631,78

10,00%

8

ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS

6.425.894,11

17,53%

9

REVESTIMENTOS

1.010.810,41

2,76%

50.540,52

5,00%

50.540,52

5,00%

101.081,04

10,00%

10

PISO

1.522.830,12

4,16%

76.141,51

5,00%

11

COBERTURA

794.151,90

2,17%

12

PINTURA

564.248,53

1,54%

13

IMPERMEABILIZAÇÃO

586.622,26

1,60%

146.655,57

25,00%

146.655,57

25,00%

146.655,57

25,00%

14

DIVERSOS

305.370,30

0,83%

15

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

186.018,99

0,51%

9.300,95

5,00%

9.300,95

5,00%

9.300,95

5,00%

16

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

115.696,95

0,32%

5.784,85

5,00%

5.784,85

5,00%

5.784,85

5,00%

17

DRENAGEM

79.137,75

0,22%

3.956,89

5,00%

3.956,89

5,00%

3.956,89

5,00%

18

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

712.529,99

1,94%

35.626,50

5,00%

35.626,50

5,00%

35.626,50

5,00%

19

SPDA

55.869,03

0,15%

2.793,45

5,00%

2.793,45

5,00%

2.793,45

5,00%

20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	761.257,96	2,08%

21

INSTALAÇÕES MECÂNICAS

4.381.934,40

11,96%

219.096,72

5,00%

219.096,72

5,00%

219.096,72

5,00%

22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.371.529,05	3,74%	68.576,45

5,00%

68.576,45

5,00%

68.576,45

5,00%

23	SUBESTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.001.629,10	2,73%

24

NO BREAK

566.499,93

1,55%

25

26
27
28

CFTV ELEVADORES
ESTRUTURA METÁLICA
PROJETO EXECUTIVO

699.436,81

751.613,25
130.407,28
254.827,26

1,91%

2,05%
0,36%
0,70%

Endereço:     Avenida Paulo Lemos de Moura Leite Pedro Roseno

TOTAL NO PERÍODO			1.097.005,83	2,99%	1.163.440,85	3,17%	696.292,89	1,90%	696.292,89	1,90%	827.937,49	2,26%	
TOTAL ACUMULADO	36.650.193,28	100,00%	10.361.395,35	28,27%	11.524.836,20	31,45%	12.221.129,09	33,35%	12.917.421,98	35,25%	13.745.359,47	37,50%	
Rio Branco - Acre, 5 de julho de 2024
Revisão do Orçamento - REV01

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	Construção do Fórum Cível na Cidade da Justiça
Município:  Rio Branco - Acre
Endereço:     Avenida Paulo Lemos de Moura Leite Pedro Roseno

4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	

ITEM	
DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM	RAZO PROGRAMADO	
		VALOR	%	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	
											
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMEN	815.806,31	2,23%							77.501,60	
9,50%	77.501,60	
9,50%	77.501,60	
9,50%	77.501,60	
9,50%	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.378.493,00	3,76%	31.429,64	
2,28%	41.216,94	
2,99%	43.284,68	
3,14%	77.057,76	
5,59%	78.574,10	
5,70%	90.980,54	
6,60%	94.564,62	
6,86%	
3	TERRAPLANAGEM	192.700,30	0,53%															
4	PAVIMENTAÇÃO	762.600,32	2,08%															
5	SINALIZAÇÃO	28.987,19	0,08%															
6	ESTRUTURAS	9.916.973,01	27,06%															
7	PAREDES E PAINÉIS	1.276.317,78	3,48%	127.631,78	
10,00%	127.631,78	
10,00%	127.631,78	
10,00%	127.631,78	
10,00%							
8	ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS	6.425.894,11	17,53%			321.294,71	
5,00%	321.294,71	
5,00%	642.589,41	
10,00%	963.884,12	
15,00%	963.884,12	
15,00%	963.884,12	
15,00%	
9	REVESTIMENTOS	1.010.810,41	2,76%	101.081,04	
10,00%	101.081,04	
10,00%	151.621,56	
15,00%	151.621,56	
15,00%	101.081,04	
10,00%	101.081,04	
10,00%	101.081,04	
10,00%	
10	PISO	1.522.830,12	4,16%	76.141,51	
5,00%	152.283,01	
10,00%	152.283,01	
10,00%	152.283,01	
10,00%	228.424,52	
15,00%	228.424,52	
15,00%	228.424,52	
15,00%	
11	COBERTURA	794.151,90	2,17%							79.415,19	
10,00%	119.122,79	
15,00%	119.122,79	
15,00%	119.122,79	
15,00%	
12	PINTURA	564.248,53	1,54%															
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	586.622,26	1,60%	146.655,57	
25,00%													
14	DIVERSOS	305.370,30	0,83%															
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	186.018,99	0,51%	9.300,95	
5,00%	9.300,95	
5,00%	9.300,95	
5,00%	9.300,95	
5,00%	9.300,95	
5,00%	27.902,85	
15,00%	27.902,85	
15,00%	
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	115.696,95	0,32%	5.784,85	
5,00%	5.784,85	
5,00%	5.784,85	
5,00%	5.784,85	
5,00%	5.784,85	
5,00%	17.354,54	
15,00%	17.354,54	
15,00%	
17	DRENAGEM	79.137,75	0,22%	3.956,89	
5,00%	3.956,89	
5,00%	3.956,89	
5,00%	3.956,89	
5,00%	3.956,89	
5,00%	11.870,66	
15,00%	11.870,66	
15,00%	
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	712.529,99	1,94%	35.626,50	
5,00%	35.626,50	
5,00%	35.626,50	
5,00%	35.626,50	
5,00%	35.626,50	
5,00%	71.253,00	
10,00%	71.253,00	
10,00%	
19	SPDA	55.869,03	0,15%	2.793,45	
5,00%	2.793,45	
5,00%	2.793,45	
5,00%	2.793,45	
5,00%	2.793,45	
5,00%	8.380,35	
15,00%	8.380,35	
15,00%	
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	761.257,96	2,08%							76.125,80	
10,00%	76.125,80	
10,00%	114.188,69	
15,00%	114.188,69	
15,00%	
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	4.381.934,40	11,96%	219.096,72	
5,00%	219.096,72	
5,00%	219.096,72	
5,00%	438.193,44	
10,00%	219.096,72	
5,00%	219.096,72	
5,00%	438.193,44	
10,00%	
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.371.529,05	3,74%	68.576,45	
5,00%	68.576,45	
5,00%	68.576,45	
5,00%	68.576,45	
5,00%	68.576,45	
5,00%	137.152,91	
10,00%	137.152,91	
10,00%	
23	SUBESTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.001.629,10	2,73%				50.081,46	5,00%	50.081,46	5,00%	50.081,46	5,00%	50.081,46	5,00%	
24	NO BREAK	566.499,93	1,55%												
25	CFTV	699.436,81	1,91%				34.971,84	
5,00%	34.971,84	
5,00%	34.971,84	
5,00%	34.971,84	
5,00%	
26	ELEVADORES	751.613,25	2,05%									
27	ESTRUTURA METÁLICA	130.407,28	0,36%						130.407,28	
100,00%		
28	PROJETO EXECUTIVO	254.827,26	0,70%									
											
	TOTAL NO PERÍODO			828.075,34	2,26%	1.088.643,28	2,97%	1.141.251,54	3,11%	2.033.511,93	5,55%	2.074.903,06	5,66%	2.403.654,90	6,56%	2.495.928,42	6,81%	
	TOTAL ACUMULADO	36.650.193,28	100,00%	14.573.434,81	39,76%	15.662.078,09	42,73%	16.803.329,63	45,85%	18.836.841,56	51,40%	20.911.744,62	57,06%	23.315.399,52	63,62%	25.811.327,94	70,43%	
Rio Branco - Acre, 5 de julho de 2024
Revisão do Orçamento - REV01

Objeto:	Construção do Fórum Cível na Cidade da Justiça
Município:  Rio Branco - Acre
Endereço:     Avenida Paulo Lemos de Moura Leite Pedro Roseno

ITEM	
DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		
		VALOR	%	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS	
								
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMEN	815.806,31	2,23%	77.501,60	
9,50%	77.501,60	
9,50%					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.378.493,00	3,76%	119.377,49	
8,66%	156.458,96	
11,35%	74.576,47	
5,41%	60.377,99	
4,38%	
3	TERRAPLANAGEM	192.700,30	0,53%									
4	PAVIMENTAÇÃO	762.600,32	2,08%	190.650,08	
25,00%	190.650,08	
25,00%	190.650,08	
25,00%	190.650,08	
25,00%	
5	SINALIZAÇÃO	28.987,19	0,08%					14.493,59	
50,00%	14.493,59	
50,00%	
6	ESTRUTURAS	9.916.973,01	27,06%									
7	PAREDES E PAINÉIS	1.276.317,78	3,48%									
8	ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS	6.425.894,11	17,53%	963.884,12	
15,00%	1.285.178,82	
20,00%					
9	REVESTIMENTOS	1.010.810,41	2,76%									
10	PISO	1.522.830,12	4,16%	228.424,52	
15,00%							
11	COBERTURA	794.151,90	2,17%	119.122,79	
15,00%	119.122,79	
15,00%	119.122,79	
15,00%			
12	PINTURA	564.248,53	1,54%	141.062,13	
25,00%	141.062,13	
25,00%	141.062,13	
25,00%	141.062,13	
25,00%	
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	586.622,26	1,60%									
14	DIVERSOS	305.370,30	0,83%	76.342,58	
25,00%	76.342,58	
25,00%	76.342,58	
25,00%	76.342,58	
25,00%	
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	186.018,99	0,51%	27.902,85	
15,00%	27.902,85	
15,00%					
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	115.696,95	0,32%	17.354,54	
15,00%	17.354,54	
15,00%					
17	DRENAGEM	79.137,75	0,22%	11.870,66	
15,00%	11.870,66	
15,00%					
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	712.529,99	1,94%	71.253,00	
10,00%	106.879,50	
15,00%	106.879,50	
15,00%			
19	SPDA	55.869,03	0,15%	8.380,35	
15,00%	8.380,35	
15,00%					
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	761.257,96	2,08%	114.188,69	
15,00%	114.188,69	
15,00%	152.251,59	
20,00%			
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	4.381.934,40	11,96%	438.193,44	
10,00%	438.193,44	
10,00%	438.193,44	
10,00%	438.193,44	
10,00%	
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.371.529,05	3,74%	205.729,36	
15,00%	205.729,36	
15,00%	68.576,45	
5,00%	68.576,45	
5,00%	
23	SUBESTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.001.629,10	2,73%	200.325,82	20,00%	200.325,82	20,00%	200.325,82	20,00%	200.325,82	20,00%	
24	NO BREAK	566.499,93	1,55%			566.499,93	
100,00%					
25	CFTV	699.436,81	1,91%	139.887,36	
20,00%	139.887,36	
20,00%	139.887,36	
20,00%	139.887,36	
20,00%	
26	ELEVADORES	751.613,25	2,05%		248.032,37	33,00%	248.032,37	33,00%	255.548,51	34,00%	
27	ESTRUTURA METÁLICA	130.407,28	0,36%					
28	PROJETO EXECUTIVO	254.827,26	0,70%					
	TOTAL NO PERÍODO			3.151.451,38	8,60%	4.131.561,83	11,27%	1.970.394,18	5,38%	1.585.457,96	4,33%	
	TOTAL ACUMULADO	36.650.193,28	100,00%	28.962.779,32	79,02%	33.094.341,15	90,30%	35.064.735,32	95,67%	36.650.193,28	100,00%	
Rio Branco - Acre, 5 de julho de 2024
Revisão do Orçamento - REV01

Objeto:	Construção do Fórum Cível na Cidade da Justiça
Município:  Rio Branco - Acre
Endereço:     Avenida Paulo Lemos de Moura Leite Pedro Roseno

ITEM	
DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM	TOTAL ACUMULADO	
		VALOR	%	25º MÊS	26º MÊS	27º MÊS	%	VALOR	
									
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMEN	815.806,31	2,23%	2,23%	815.806,31		0,00%		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.378.493,00	3,76%	5,99%	2.194.299,31		0,00%		
3	TERRAPLANAGEM	192.700,30	0,53%	6,51%	2.386.999,61		0,00%		
4	PAVIMENTAÇÃO	762.600,32	2,08%	8,59%	3.149.599,93		0,00%		
5	SINALIZAÇÃO	28.987,19	0,08%	8,67%	3.178.587,12		0,00%		
6	ESTRUTURAS	9.916.973,01	27,06%	35,73%	13.095.560,13		0,00%		
7	PAREDES E PAINÉIS	1.276.317,78	3,48%	39,21%	14.371.877,91		0,00%		
8	ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS	6.425.894,11	17,53%	56,75%	20.797.772,01		0,00%		
9	REVESTIMENTOS	1.010.810,41	2,76%	59,50%	21.808.582,42		0,00%		
10	PISO	1.522.830,12	4,16%	63,66%	23.331.412,54		0,00%		
11	COBERTURA	794.151,90	2,17%	65,83%	24.125.564,44		0,00%		
12	PINTURA	564.248,53	1,54%	67,37%	24.689.812,97		0,00%		
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	586.622,26	1,60%	68,97%	25.276.435,24		0,00%		
14	DIVERSOS	305.370,30	0,83%	69,80%	25.581.805,54		0,00%		
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	186.018,99	0,51%	70,31%	25.767.824,53		0,00%		
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	115.696,95	0,32%	70,62%	25.883.521,48		0,00%		
17	DRENAGEM	79.137,75	0,22%	70,84%	25.962.659,23		0,00%		
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	712.529,99	1,94%	72,78%	26.675.189,21		0,00%		
19	SPDA	55.869,03	0,15%	72,94%	26.731.058,24		0,00%		
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	761.257,96	2,08%	75,01%	27.492.316,20		0,00%		
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	4.381.934,40	11,96%	86,97%	31.874.250,60		0,00%		
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.371.529,05	3,74%	90,71%	33.245.779,65		0,00%		
23	SUBESTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.001.629,10	2,73%	93,44%	34.247.408,75		0,00%		
24	NO BREAK	566.499,93	1,55%	94,99%	34.813.908,68		0,00%		
25	CFTV	699.436,81	1,91%	96,90%	35.513.345,49		0,00%		
26	ELEVADORES	751.613,25	2,05%	98,95%	36.264.958,74		0,00%		
27	ESTRUTURA METÁLICA	130.407,28	0,36%	99,30%	36.395.366,02		0,00%		
28	PROJETO EXECUTIVO	254.827,26	0,70%	100,00%	36.650.193,28		0,00%		
									
	TOTAL NO PERÍODO							
	TOTAL ACUMULADO	36.650.193,28	100,00%					
Rio Branco - Acre, 5 de julho de 2024
Revisão do Orçamento - REV01

RICARDO CURADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5060903792/D-SP