MATRIZ DE RISCOS
Objeto: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ACRELÂNDIA
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE – TJ/AC
Município: ACRELÂNDIA/AC

MATRIZ DE RISCOS	
TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO	
RISCOS DE PROJETO	Adequações e dificuldade de elaboração do projeto executivo em relação ao projeto básico	Atraso cronograma	Cláusula no contrato prevendo alteração do projeto básico	
Contratado	
RISCOS DE PROJETO	Aumento do prazo de elaboração do projeto executivo.	Atraso cronograma	Cláusula contratual prevendo penalidades,
glosa no valor da medição (IMR) e rescisão do contrato	
Contratado	
RISCOS DE PROJETO	Danos e prejuízos causados à obra por erro ou falha de projeto	Atraso cronograma e elevação de custos	Seguro de risco de engenharia e cláusula contratual de aplicação de penalidades e rescisão do contrato	
Contratado	
RISCOS DE PROJETO	Alteração	de	projeto	(básico)	por determinação do contratante.
Mudança na concepção	Atraso cronograma e elevação dos custos de projetos e obras	Aditivo Contratual.	
Contratante	
RISCOS DE PROJETO	Alteração de  projeto  feita  por  entidades
públicas ou órgãos ambientais, por omissão do projeto básico	Atraso cronograma e elevação dos custos de projetos e obras	Aditivo Contratual.	Contratante	
RISCOS DE PROJETO	Impossibilidade de execução da obra sem o devido remanejamento de redes da Energisa/SAERB/Fibra Ótica desconhecidas	Atraso cronograma e elevação dos custos de projetos e obras	
Aditivo Contratual.	Contratante
/Concessionárias	

RISCO GEOLÓGICO	Ocorrência de acréscimos de volumes de escavação em solo (inclusive de terceira categoria e rocha) ou ocorrências de obras especiais de contenção, comconsumo maior de aço e concreto ou alteração de metodologia a técnica de
construção.	

Atraso cronograma/Elevação dos custos deobra	

Contratação semi- integrada, Remuneração de risco prevista em contrato.	

Contratado	
RISCO GEOLÓGICO	Necessidade de sistemas especiais para rebaixamento delençol freático	Atraso cronograma/Elevação dos custos deobra	Contratação semi- integrada, Remuneraçãode risco prevista em
contrato.	
Contratado	

RISCO GEOLÓGICO	Acréscimos de serviços para contenção de sinistro	Atraso cronograma/Elevação dos
custos de obra	Contratação semi-integrada, Remuneração de risco prevista em contrato.	Contratado	

RISCO
METEOROLÓGICO	Refazimento de serviços ou paralisados motivados porquestões climáticas.	
Atraso cronograma/Elevação dos custos de obra	Cláusula Contratual: parachuvas nas médias históricas dos últimos 10 anos - a Contratada já prevê nos custos. Acima da
média histórica a Contratante responde.	
Contratado	
LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Não obtenção de licenças para canteiros e
bota fora. Necessidade de complementação de estudos.	Atraso cronograma/Elevação dos custos de obra	Responsabilidade do Contratado obter todaslicenças em todas as esferas governamentais	
Contratado	
RISCO AMBIENTAL	Eventuais	exigências	do	Departamento Estadual de Meio Ambiente, não previstas.	Atraso cronograma/Elevação dos custos de obra	Responsabilidade da Contratada a perfeita execução dos planos da
LAI.	
Contratado	
RISCO AMBIENTAL	Possibilidade de descobertas arqueológicas ou outras  interferências com  patrimônio
cultural.	Atraso cronograma/Elevação dos custos de obra	
Aditivo contratual.	
Contratante	
RISCO AMBIENTAL	Possibilidade de descobertas de áreas contaminadas com necessidade de remediação.	Atraso cronograma/Elevação dos custos de obra	Aditivo contratual.	Contratante