TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO	

RISCO DE PROJETO	Alteração de projeto (básico) por determinação do contratante.
Mudança na concepção.	Atraso no Cronograma e elevaçãol dos custos de projetos e obras	
Aditivo Contratual	
Contratanta	

RISCO DE PROJETO	Alteração de projeto feita por entidades públicas ou órgãos ambientais, por omissão do projeto
básico	Atraso no Cronograma e elevaçãol dos custos de projetos e obras	
Aditivo Contratual	
Contratanta	

RISCO DE PROJETO	Impossibilidade de execução da obra sem o devido remanejamento de redes da Energisa/SAERB/Fibra Ótica desconhecidas	
Atraso no Cronograma e elevaçãol dos custos de projetos e obras	

Aditivo Contratual	
Contratante e Concessionárias	
RISCO GEOLÓGICO	Acréscimos de serviços para
contenção de sinistro	Atraso no cronograma
Elevação dos custos de obra	Aditivo Contratual	Contratante	

RISCO METEOROLÓGICO	

Refazimento de serviços ou paralizações motivados por questões climáticas	

Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	Cláusula Contratual: para chuvas nas médias histórias dos últimos 10 anos, a contratada já prevê os custos.
Acima da média histórica a Contratante responde.	

Contratada	

LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Não obtenção de licenças para canteiros e bota fora. Necessidade de complementação de estudos	
Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	Responsabilidade do Contratado obter todas as licenças em todas as esferas
governamentais	
Contratada	

RISCO AMBIENTAL	Eventuais exigências do Departamento Estadual de Meio Ambiente, não previstas.	
Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	Responsabilidade da Contratada a perfeita execução dos planos da LAI	
Contratada	

RISCO AMBIENTAL	Possibilidade de descobertas arqueológicas ou outras
interferências com patrimônio	Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	
Aditivo Contratual	
Contratante	

RISCO AMBIENTAL	Possibilidade de descobertas de áreas contaminadas com
necessidade de remediação	Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	
Aditivo Contratual	
Contratante